연번 30

정책실명제 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	급경사지 붕괴위험지역 정비사업
② 추진배경	재해위험도가 높은 급경사지 붕괴위험지역에 대한 정비를 통해 재해 사전 예방 필요 * (추진근거) 급경사지법 제12조~제13조
③ 사업개요	- 사업기간 : 2019. 1. 18. ~ 2022. 08. 30. - 위 치 : 금산군 제원면 저곡리 일원(지방도 601호) - 사 업 량 : 급경사지 정비 1식(L=500m, H=70m) - 사 업 비 : 9,929백만원(국 4,964.5 도 4,964.5)
④ 사업부서	종합건설사업소 공주지소		⑤ 담당자	지소장 김정흠 시설8급 전경빈
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2019. 1. 18. ~ 2022. 08. 30.
<그간 주요 추진내용>
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 (2차분 및 전체분) 설계변경(4회) 시행결의		‘22.06.24	김정흠 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 전경빈 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 암판정 위원회 개최결과 보고		‘21.11.30	김정흠 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 낙석 발생에 따른 조치결과 보고		‘21.10.16	김정흠 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 낙석피해 발생에 따른 현장점검 및 긴급자문 결과 보고		‘21.10.14	김정흠 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 낙석 발생에 따른 조치결과 보고		‘21.10.12	김정흠 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 공기연장 시행결의		‘21.10.11	김정흠 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 재해예방사업 현장 점검 - 신임 행정안전부 안전차관 방문		‘21.08.20	김정흠 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 재해예방사업 현장 점검 - 행안부 예방안전정책관 방문		‘21.06.24	전상근 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 (2차분 및 전체분) 설계변경(3회) 시행결의		‘21.06.03	전상근 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 낙석피해 발생에 따른 현장점검 및 긴급자문 결과 보고		‘21.04.20	전상근 공주지소 지소장 이경원 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 (2차분 및 전체분) 설계변경(2회) 시행결의		‘20.12.15	전상근 공주지소 지소장 최성호 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 사전설계검토 조치계획서 제출		‘20.11.24	전상근 공주지소 지소장 최성호 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 낙반피해에 따른 주민설명회 결과 보고		‘20.09.20	전상근 공주지소 지소장 최성호 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 추진관련 토론회 결과 보고		‘20.07.23	전상근 공주지소 지소장 최성호 구조물관리팀장 박병현 주무관
○ 저곡지구 급경사지 정비사업 (2차분 및 전체분) 설계변경 시행결의		‘20.03.24	전상근 공주지소 지소장 최성호 구조물관리팀장 남정민 주무관
○ [금산]저곡지구 급경사지 정비사업(1차분) 설계변경 검토보고		‘19.04.16	주협종 공주지소 지소장 권호욱 구조물관리팀장 이형기 주무관
○ [착공계]저곡지구 급경사지 정비사업(1차분)		‘19.01.18	윤용희 주무관
○ [금산]저곡지구 급경사지 정비사업 계약심사 및 일상감사 수정본 의뢰		‘18.11.07	주협종 공주지소 지소장 진기영 보수2팀장 윤용희 주무관
○ 사전재해영향성 검토협의 요청(저곡지구 급경사지 정비사업)		‘18.09.17	주협종 공주지소 지소장 진기영 보수2팀장 윤용희 주무관