연번 31

정책실명제 대상사업 사업내역서

①정책사업명	[논산]우곤도로 위험도로 선형개량공사
② 추진배경	논산시 성동면 우곤리 일원 기존 도로 선형이 불량함에 따라 선형개량 통해 도민의 안전한 교통 환경 조성
③ 사업개요	선형개량 L=1.85km, B=11.5m
④ 사업부서	종합건설사업소 공주지소		⑤ 담당자	지소장 김정흠 시설7급 이경복
⑥ 선정기준	총 사업비 50억원 이상		⑦ 사업기간	’17.09.~’23.05.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 계약 의뢰 ※ 공주지소-736(2016.01.22.)		‘16.01.22	이기호 지소장 윤여웅 팀장 김택근 주무관
○ 실시설계용역 착수 ※ 공주지소-3974(2016.04.14.)		‘16.04.14	이현세 주무관
○ 주민설명회 개최 알림 ※ 공주지소-5689(2016.05.26)		‘16.05.26	김용군 지소장 박상용 팀장 김택근 주무관
○ 소규모환경영향평가 착수 ※ 공주지소-12522(2016.11.14.)		‘16.11.14	이현세 주무관
○ 감정평가 의뢰 ※ 공주지소-12722(2016.11.17.)		‘16.11.17	김용군 지소장 주창근 팀장 윤용희 주무관
○ 편입토지 토지분할 대위신청 ※ 공주지소-13301(2016.12.01.)		‘16.12.01	김용군 지소장 주창근 팀장 윤용희 주무관
○ 도로구역 결정, 접도구역 지정, 지형도면 변경고시 의뢰 ※ 공주지소-3750(2017.03.31.)		‘17.03.31	이대철 지소장 주창근 팀장 윤용희 주무관
○ 도로구역 결정(변경), 접도구역 지정(변경), 지형도면(변경) 고시 알림 ※ 공주지소-3906(2017.04.06.)		‘17.04.06	윤용희 주무관
○ 실시설계용역 준공 ※ 공주지소-3984(2016.04.06.)		‘17.04.06	이현세 주무관
○ 문화재 지표조사용역 시행결의 ※ 공주지소-4098(2017.04.10.)		‘17.04.10	이대철 지소장 주창근 팀장 윤용희 주무관
○ 보상계획공고 의뢰 ※ 공주지소-4205(2017.04.12.)		‘17.04.12	이대철 지소장 주창근 팀장 윤용희 주무관
○ 보상계획 공고 알림 ※ 공주지소-4317(2017.04.14.)		‘17.04.14	이대철 지소장 주창근 팀장 윤용희 주무관
○ 소규모환경영향평가 준공 ※ 공주지소-4249(2017.04.13.)		‘17.04.13	이현세 주무관
○ 문화재 지표조사용역 착수 ※ 공주지소-5481(2017.05.19.)		‘17.05.19	이현세 주무관
○ 문화재 지표조사용역 완료 ※ 공주지소-5861(2017.05.30.)		‘17.05.30	이현세 주무관
○ 문화재 시굴조사용역 시행결의 ※ 공주지소-6780(2017.06.21.)		‘17.06.21	이대철 지소장 주창근 팀장 윤용희 주무관
○ 계약심사 및 일상감사 의뢰 ※ 공주지소-7074(2017.06.27.)		‘17.06.27	이대철 지소장 주창근 팀장 윤용희 주무관
○ 문화재 시굴조사용역 착수 ※ 공주지소-7607(2017.07.11.)		‘17.07.11	이현세 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 시행결의 ※ 공주지소-9361(2017.08.28.)		‘17.08.28	이대철 지소장 박상철 팀장 윤용희 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량사업 폐기물처리용역 시행결의 ※ 공주지소-9971(2017.09.12.)		‘17.09.12	이대철 지소장 박상철 팀장 윤용희 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 착수 ※ 공주지소-10780(2017.09.28.)		‘17.09.28	신상희 주무관
○ 폐기물처리용역 착수 ※ 공주지소-12010(2017.11.03.)		‘17.11.03	신상희 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 1차분 준공 ※ 공주지소-13997(2017.12.20.)		‘17.12.20	신상희 주무관
○ 폐기물처리용역(2차분) 시행결의 ※ 공주지소-3680(2018.04.24.)		‘18.04.24	주협종 지소장 진기영 팀장 이형기 주무관
○ 폐기물처리용역(2차분) 착수 ※ 공주지소-3851(2018.04.27.)		‘18.04.27	신상희 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 2차분 시행결의 ※ 공주지소-3887(2018.04.30.)		‘18.04.30	주협종 지소장 진기영 팀장 이형기 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 2차분 착수 ※ 공주지소-3880(2018.04.29.)		‘18.04.29	신상희 주무관
○ 문화재 정밀발굴조사 용역 시행결의 ※ 공주지소-7199(2018.08.08.)		‘18.08.08	주협종 지소장 진기영 팀장 이형기 주무관
○ 문화재 정밀발굴조사 용역 착수 ※ 공주지소-7852(2018.08.28.)		‘18.08.28	신상희 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 2차분 재착수 ※ 공주지소-8171(2018.09.05.)		‘18.09.05	신상희 주무관
○ 문화재 정밀발굴조사 용역 완료 ※ 공주지소-9816(2018.10.23.)		‘18.10.23	신상희 주무관
○ 문화재 시굴조사용역 완료 ※ 공주지소-12529(2018.12.20.)		‘18.12.20	신상희 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 2차분 재착수 ※ 공주지소-2099(2019.03.08.)		‘19.03.08	이은경 주무관
○ 임목폐기물처리용역 시행결의 ※ 공주지소-3754(2019.04.16.)		‘19.04.16	주협종 지소장 박상철 팀장 이상열 주무관
○ 임목폐기물처리용역 착수 ※ 공주지소-4125(2019.04.24.)		‘19.04.24	이은경 주무관
○ 시굴조사용역(개척리 유물산포지) 시행결의 ※ 공주지소-4386(2019.04.30.)		‘19.04.30	주협종 지소장 박상철 팀장 이상열 주무관
○ 시굴조사용역(개척리 유물산포지) 착수 ※ 공주지소-4883(2019.05.15.)		‘19.05.15	이은경 주무관
○ 시굴조사용역(개척리 유물산포지)완료 ※ 공주지소-5994(2019.06.11.)		‘19.06.11	이은경 주무관
○ 물가변동(1회,2회) 계약금액 조정 승인알림 ※ 공주지소-6147(2019.06.17.)		‘19.06.17	주협종 지소장 박상철 팀장 이상열 주무관
○ 임목폐기물처리용역 완료 ※ 공주지소-6516(2019.06.21.)		‘19.06.21	이은경 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 2차분 준공 ※ 공주지소-9049(2019.08.26.)		‘19.08.26	이은경 주무관
○ 폐기물처리용역 2차분 완료 ※ 공주지소-9874(2019.09.18.)		‘19.09.18	이은경 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 3차분 시행결의 ※ 공주지소-13947(2019.12.26.)		‘19.12.26	주협종 지소장 강현수 팀장 강석모 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 3차분 착공 ※ 공주지소-14013(2019.12.27.)		‘19.12.27	이은경 주무관
○ 공시송달 공고 ※ 공주지소-4145(2020.04.20.)		‘20.04.20	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 수용재결 신청 ※ 공주지소-4946(2020.05.11.)		‘20.05.11	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 문화재정밀발굴조사 용역 시행결의 ※ 공주지소-6892(2020.06.18.)		‘20.06.18	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 문화재정밀발굴조사 용역 착수 ※ 공주지소-9212(2020.08.10.)		‘20.08.10	박정윤 주무관
○ 수용재결 신청에 따른 열람공고 의뢰 회신 ※ 공주지소-9856(2020.08.26.)		‘20.08.26	김영걸 주무관
○ 수용재결신청에 따른 사업시행자 의견 조회 ※ 공주지소-10090(2020.09.01.)		‘20.09.01	김영걸 주무관
○ 논산 우곤도로 선형개량공사부지 내 유적 발굴완료 조치 통보 ※ 공주지소-10501(2020.09.09.)		‘20.09.09	김영걸 주무관
○ 수용재결 신청에 따른 열람공고 의뢰 ※ 공주지소-10549(2020.09.09.)		‘20.09.09	김영걸 주무관
○ 이의신청에 따른 자료 제출 협조 ※ 공주지소-10688(2020.09.10.)		‘20.09.10	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 논산 우곤도로 선형개량공사 부지 내 유적 발굴허가 ※ 공주지소-10709(2020.09.10.)		‘20.09.10	김영걸 주무관
○ 수용재결 이의신청에 따른 사업시행자 의견 제출 ※ 공주지소-11577(2020.09.22.)		‘20.09.22	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 이의신청에 따른 감정평가 의견 회신 ※ 공주지소-11529(2020.09.21.)		‘20.09.21	김영걸 주무관
○ 수용재결 이의신청에 따른 사업시행자 의견 제출 ※ 공주지소-11577(2020.09.22.)		‘20.09.22	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 폐기물처리용역(3차분) 시행결의 ※ 공주지소-12575(2020.10.16.)		‘20.10.16	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 논산 우곤도로 선형개량공사부지 내 유적 발굴완료 조치 통보(제2020-1256호) ※ 공주지소-12622(2020.10.16.)		‘20.10.16	김영걸 주무관
○ 문화재 정밀발굴조사 용역 완료 ※ 공주지소-12903(2020.10.22.)		‘20.10.22	박정윤 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 3차분 재착수 ※ 공주지소-13252(2020.10.29.)		‘20.10.29	이은경 주무관
○ 공부발급 의뢰 ※ 공주지소-13956(2020.11.12.)		‘20.11.12	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 공부발급 의뢰 요청자료 제출 ※ 공주지소-14470(2020.11.25.)		‘20.11.25	김영걸 주무관
○ 공부발급 의뢰 요청자료 제출 ※ 공주지소-14470(2020.11.25.)		‘20.11.25	김영걸 주무관
○ 반송 재결서 송달주소 제출 ※ 공주지소-15409(2020.12.10.)		‘20.12.10	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 수용재결 정정 요청 ※ 공주지소-15436(2020.12.10.)		‘20.12.10	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 보상금 공탁 결의 ※ 공주지소-15434(2020.12.10.)		‘20.12.10	전상근 지소장 강현수 팀장 김영걸 주무관
○ 수용재결서 정본 송부 ※ 공주지소-809(2021.01.21.)		‘21.01.21	김영걸 주무관
○ 정정재결서 정본 송부 ※ 공주지소-810(2021.01.21.)		‘21.01.21	김영걸 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 3차분 재착수 ※ 공주지소-2512(2021.03.03.)		‘21.03.03	장혜원 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사 폐기물처리용역 3차분 재착수 ※ 공주지소-2503(2021.03.03.)		‘21.03.03	이용훈 주무관
○ 지정폐기물(석면) 철거공사 착수 ※ 공주지소-11193(2021.09.09.)		‘21.09.09	정명훈 주무관
○ 지정(석면) 폐기물처리 용역 착수 ※ 공주지소-11257(2021.09.10.)		‘21.09.10	탁상욱 주무관
○ 지정폐기물(석면) 철거공사 준공 ※ 공주지소-12069(2021.09.30.)		‘21.09.30	정명훈 주무관
○ 지정(석면) 폐기물처리용역 완료 ※ 공주지소-12138(2021.10.05.)		‘21.10.05	탁상욱 주무관
○ 임목폐기물 처리용역 착수 ※ 공주지소-15385(2021.12.13.)		‘21.12.13	정명훈 주무관
○ 우곤도로 위험도로 선형개량공사(3차분) 재착공 ※ 공주지소-2393(2022.03.04.)		‘21.03.04	정명훈 주무관