연번 32

정책실명제 대상사업 사업내역서

①정책사업명	KTX공주역 진입지방도 선형개량공사
② 추진배경	선형불량 구간 선형개량을 통한 시거 확보 및 안전한 도로환경 조성을 통한 KTX공주역 활성화에 이바지
③ 사업개요	- 사업기간 : 2019. 8. ~ 2022. 12. - 위 치 : 공주시 이인면 이인리, 복룡리 일원(지방도 697호) - 사 업 량 : 선형개량 L=1.7km, B=17m) - 사 업 비 : 10,976백만원(공사비 8,307 보상비 등 2,669)
④ 사업부서	종합건설사업소 공주지소		⑤ 담당자	지소장 김정흠 시설7급 소순원
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2019. 8. ~ 2022. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 의뢰		‘16.02.18.	이기호 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김정주 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 결과 알림		‘16.02.22	이기호 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김정주 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 기본 및 실시설계용역 시행결의		‘16.02.23	이기호 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김정주 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 기본 및 실시설계용역 계약의뢰		‘16.02.24	이기호 공주지소장 한성대 서무팀장 이현세 주무관
○ 사업수행능력평가 결과 보고(KTX공주역 진입 지방도 선형개선사업 기본및실시설계용역)		‘16.04.25	김용군 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김정주 주무관
○ [착수계](KTX공주역 진입 지방도 선형개선사업 기본및실시설계용역)		‘16.05.10	김용군 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김정주 주무관
○ 기술자문위원회 구성·운영 계획 보고(KTX공주역 진입지방도 선형개선사업)		‘16.06.22	김용군 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김정주 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 설계용역 관련 업무협의		‘16.11.10	김용군 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 설계용역 관련 업무협의(추가)		‘16.11.14	김용군 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 실시설계용역관련 지반조사계획 승인		‘17.01.05	김용군 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 기본 및 실시설계용역 추진계획 검토보고		‘17.04.21	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 기본 및 실시설계용역 일시중지 알림		‘17.04.21	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 소규모환경영향평가용역 시행결의		‘17.05.18	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 문화재 지표조사용역 시행결의		‘17.05.18	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ [착수계]KTX공주역 진입도로 선형개량사업 소규모 환경영향평가용역		‘17.05.30	이현세 주무관
○ [착수계]KTX공주역 진입도로 선형개량사업 문화재 지표조사용역		‘17.06.09	이현세 주무관
○ [완료계]KTX공주역 진입도로 선형개량사업 소규모 환경영향평가용역		‘17.07.03	이현세 주무관
○ 공주 복룡리 KTX공주역 진입 지방도 선형개선사업부지 내 문화재 보존조치 통보		‘17.07.05	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 소규모 환경영향평가 용역 중지 검토보고		‘17.07.27	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 나승훈 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 교량신설 관련 수리검토결과 제출		‘17.08.29	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 교량신설 관련 협의 회신		‘17.09.08	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 관련 하천협의 요청		‘17.11.14	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 관련 협의 회신		‘17.11.20	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 관련 수질오염총량검토 협의 요청		‘17.12.15	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ 수질오염총량관리 검토결과 회신(KTX공주역 진입도로 선형개량사업)		‘17.12.19	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 편입토지 등에 대한 보상액 결정		‘17.12.28	이대철 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ 사전재해영향성 검토 협의 요청(KTX공주역 진입도로 선형개량사업)		‘18.02.05	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업에 따른 사전재해영향성 검토 결과 알림		‘18.02.26	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ 수질오염총량관리 검토의견 알림(KTX공주역 진입도로 선형개량 사업)		‘18.03.21	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ 소규모 환경영향평가서 보완 요청(KTX공주역 진입도로 선형개량 사업)		‘18.03.26	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업에 따른 사전재해영향성검토 조치계획 보고		‘18.04.10	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량 사업 소규모 환경영향평가서 보완 제출		‘18.05.09	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ 수질오염총량관리 검토의견 알림(KTX공주역 진입도로 선형개량 사업)		‘18.05.10	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ 소규모 환경영향평가 협의 내용 알림(KTX공주역 진입도로 선형개량사업)		‘18.05.11	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ 환경영향평가 생태계보전협력금 대상사업 알림(KTX공주역 진입도로 선형개량 사업)		‘18.05.14	추연수 주무관
○ KTX공주역 진입도로 소규모환경영향평가 용역 중지 해제 결의		‘18.05.30	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 소규모환경영향평가 협의내용 반영결과 제출		‘18.05.30	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 김택근 주무관
○ [재착수계]KTX공주역 진입도로 선형개량사업 소규모 환경영향평가 용역		‘18.05.30	신상희 주무관
○ [준공계]KTX공주역 진입도로 선형개량사업 소규모환경영향평가용역		‘18.06.03	김택근 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량사업 기본 및 실시설계 경제성검토(설계VE)용역 시행결의		‘18.08.22	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ [착수계]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 기본 및 실시설계용역 경제성 검토용역		‘18.08.29	주협종 공주지소장 이광숙 보수1팀장 신상희 주무관
○ 감정평가 의뢰(KTX공주역 진입지방도 선형개량사업)		‘18.09.07	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개선사업 기본 및 실시설계 교통안전진단용역 시행결의		‘18.09.11	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ 충청남도 지방건설기술심의위원회 설계심의 요청(KTX공주역 진입 지방도 선형개선사업)		‘18.09.13	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ [착수계]KTX공주역 진입도로 지방도 선형개량사업 실시설계 교통안전진단용역		‘18.09.13	신상희 주무관
○ [준공계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 실시설계용역 경제성검토용역		‘18.09.27	신상희 주무관
○ [준공계]KTX공주역 진입도로 지방도 선형개량사업 실시설계 교통안전진단용역		‘18.09.28	추연수 주무관
○ 감정평가 완료에 따른 보상액 산정 결과보고(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘18.10.18	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 공사원가 사전검토 의뢰		‘18.10.24	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장
○ 감정평가 의뢰(KTX공주역 진입 지방도 선형개선사업)		‘18.10.25	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ [공주]ktx공주역 진입 지방도 선형개량사업 편입토지 분할측량 의뢰		‘18.10.25	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ 손실보상 협의요청(ktx공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘18.10.26	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 도로구역 결정 고시 의뢰		‘18.10.29	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 폐기물처리용역(건설, 임목) 계약심사 및 일상감사 의뢰		‘18.11.12	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 폐기물처리용역(건설, 임목) 계약심사 및 일상감사 결과 알림		‘18.11.14	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ 감정평가서회보(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업-지장물)		‘18.11.30	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ 지장물 감정평가에 따른 보상액 산정 결과보고(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘18.12.02	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ 손실보상 협의요청(KTX공주역 진입지방도 선형개량사업)		‘18.12.02	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 편입토지 토지분할 대위신청		‘18.12.11	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 공공측량성과 심사 요청		‘18.12.11	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 토지 분할 대위 정정 신청		‘18.12.13	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 발주계획 검토보고		‘18.12.18	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ 공유수면 점용사용허가 알림(충청남도 종합건설사업소/KTX공주역 지방도개량사업)		‘18.12.24	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 기본 및 실시설계용역 용역중지 해제 (정정) 결의		‘18.12.27	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 실시설계용역 설계변경(정정) 시행결의		‘18.12.27	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ [재착수계] KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 기본 및 실시설계용역		‘18.12.27	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ 2018년 제14회 충청남도 지방건설기술심의위원회 조치결과 제출(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘19.01.04	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 폐기물처리용역(건설, 임목) 일상감사 조치결과 제출		‘19.01.09	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 일상감사 및 계약심사 의뢰		‘19.01.11	주협종 공주지소장 윤여웅 보수1팀장 추연수 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 일상감사 및 계약심사 의뢰건 반려		‘19.01.22	주협종 공주지소장 이중원 보수1팀장 이상열 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 일상감사 및 계약심사 의뢰		‘19.03.04	주협종 공주지소장 이중원 보수1팀장 이상열 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 일상감사 및 계약심사 결과 알림		‘19.03.05	주협종 공주지소장 이중원 보수1팀장 이상열 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 일상감사 조치결과 제출		‘19.03.12	주협종 공주지소장 이중원 보수1팀장 이상열 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 편입토지 분할측량 의뢰(누락)		‘19.03.18	주협종 공주지소장 이중원 보수1팀장 이상열 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사(1구간) 시행결의		‘19.04.23	김영선 공주지소장 권호욱 보수1팀장 임하성 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사(1구간) 계약의뢰		‘19.05.08	김영선 공주지소장 권호욱 보수1팀장 임하성 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사 1구간(1차분) 시행결의		‘19.07.22	김영선 공주지소장 권호욱 보수1팀장 임하성 주무관
○ [착공계]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업		‘19.08.01	김영선 공주지소장 권호욱 보수1팀장 임하성 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사 공사중지 검토보고		‘19.09.10	김영선 공주지소장 권호욱 보수1팀장 임하성 주무관
○ 도로구역 결정(변경), 접도구역 지정(변경), 지형도면(변경)의 알림(KTX공주역 선형개량)		‘19.12.04	김영선 공주지소장 권호욱 보수1팀장 임하성 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사 공사중지 해제 결의		‘19.12.04	김영선 공주지소장 권호욱 보수1팀장 임하성 주무관
○ [재착공계] KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업		‘19.12.09	이은경 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사 설계변경 검토보고		‘19.12.13	김영선 공주지소장 권호욱 보수1팀장 임하성 주무관
○ [준공계]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업		‘19.12.23	이은경 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사 1구간(2차분) 시행결의		‘20.04.07	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ [착공계]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업(1구간)(2차분)		‘20.04.27	이은경 주무관
○ [선금신청서]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업(1구간)(2차분)		‘20.04.29	이은경 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업(1구간)(2차분) 선금 지급결의		‘20.04.29	전상근 공주지소장 이광숙 서무팀장 이은경 주무관
○ 감정평가 의뢰(KTX 공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘20.06.09	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ [하도급통보서]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업		‘20.06.28	강석모 주무관
○ [부분하도급통보서]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 2차분		‘20.06.29	강석모 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업(1구간) 하도급계약 통보건에 대한 검토보고		‘20.07.31	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ [하도급직불합의서]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업(1구간)		‘20.08.05	이은경 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 도로구역 결정(변경) 의뢰		‘20.08.06	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사 설계도서 검토 제출		‘20.08.07	강석모 주무관
○ KTX공주역 진입 지방도 선형개량공사 설계도서 검토에 대한 의견 조회		‘20.08.07	강석모 주무관
○ 감정평가에 따른 보상액 산정 결과보고(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘20.08.23	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물 처리용역 일상감사 및 계약심사 의뢰		‘20.10.16	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물 처리용역 일상감사 및 계약심사 결과 알림		‘20.10.20	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물처리용역 시행결의		‘20.10.21	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물처리용역 계약의뢰		‘20.10.21	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ 설계도서 검토의견서 제출(KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 기본 및 실시설계용역)		‘20.10.22	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 임목폐기물처리용역 시행결의		‘20.10.30	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물처리용역 일상감사 조치결과 제출		‘20.11.05	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업에 따른 검토보고		‘20.11.16	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 고시 관련 관계기관 협의사항 알림(KTX공주역 진입도로)		‘20.11.18	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 1구간 편입토지(산림청) 분할측량 의뢰		‘20.11.24	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 고시 관련 관계기관 협의사항 조치계획 제출 및 고시 의뢰(KTX공주역 진입도로)		‘20.11.25	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ [착수계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 임목폐기물처리용역		‘20.12.02	이은경 주무관
○ [선금신청서]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 임목폐기물처리용역		‘20.12.03	이은경 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 임목폐기물처리용역 선금 지급결의		‘20.12.07	이은경 주무관
○ [착수계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물처리용역(1차분)		‘20.12.09	이은경 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 1구간(2차분) 1회 설계변경 검토보고		‘20.12.21	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ [기성검사원]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업(1구간)(2차분)		‘20.12.29	이은경 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량공사 관련 문화재 경위서 제출		‘21.01.04	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 강석모 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량공사 관련 법적 조치 및 공사 중지 통보		‘21.01.11	강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ 보상계획공고 의뢰(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘21.01.20	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [하도급직불합의서]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업(2차분)		‘21.01.27	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [재착수계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물처리용역(1차분)		‘21.03.03	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [재착수계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 임목폐기물처리용역		‘21.03.03	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [재착공계]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업(2차분)		‘21.03.03	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 1구간(전체분) 1회 설계변경 검토보고		‘21.03.08	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 실정보고에 따른 검토보고(제2호 사토장 선정)		‘21.03.09	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ 손실보상 1차 협의요청(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘21.03.15	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ 손실보상 2차 협의요청(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘21.04.21	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 지정(석면)폐기물처리용역 시행결의		‘21.05.10	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 지정폐기물(석면) 철거공사 시행결의		‘21.05.18	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업 (석면)폐기물처리용역 시행결의		‘21.05.26	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 1구간(2차분) 2회 설계변경 시행결의		‘21.05.31	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [착공계] [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 지정폐기물(석면)철거 공사		‘21.05.31	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 실정보고(분묘조사 및 무연분묘 개장 용역) 검토보고		‘21.06.01	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 실정보고(지장가옥 석면조사 결과보고서) 검토보고		‘21.06.01	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 실정보고(매립구조물 깨기 및 폐기물처리) 검토보고		‘21.06.01	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [준공계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업(2차분)		‘21.06.01	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [착공계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업(3차분)		‘21.06.01	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [착수계] KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 지정(석면)폐기물처리용역		‘21.06.07	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ 하도급 관리계획 변경 적정성 검토보고([공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업)		‘21.06.09	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 하도급 계약 적정성 검토보고		‘21.06.09	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ 손실보상 3차 협의요청(KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업)		‘21.06.09	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [선금신청서]KTX공주역 진입 지방도 선형개량사업(1구간)-3차분		‘21.06.22	전상근 공주지소장 강현수 보수1팀장 이경복 주무관
○ [준공계] [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 지정폐기물(석면) 철거 공사		‘21.06.28	장혜원 주무관
○ [완료계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물처리용역(1차분)		‘21.06.28	이용훈 주무관
○ [착수계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물처리용역(2차분)		‘21.06.29	이용훈 주무관
○ [완료계] KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 지정(석면)폐기물처리용역		‘21.07.05	탁상욱 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 관련 물가변동에 따른 계약금액 조정 요청 건 검토의뢰		‘21.08.18	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ [공주]KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 실정보고 승인(3차) 검토보고		‘21.08.25	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량사업(3차분) 하도급 계약 적정성 검토보고		‘21.09.15	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ [기성검사원]KTX공주역 진입지방도 선형개량공사(3차분)		‘21.09.16	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ 수용재결 신청에 따른 열람공고 의뢰[KTX공주역 진입지방도 선형개량공사(21수용1096호)]		‘21.10.05	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입도로 선형개량공사 실정보고(4차) 승인 검토보고		‘21.10.22	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 공사 및 폐기물처리용역 일시정지 검토보고		‘21.10.22	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ 수용재결 신청에 따른 열람공고 결과 제출[KTX공주역 진입지방도 선형개량공사(21수용 1096호)		‘21.11.22	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ 수용재결 신청에 따른 사업시행자 의견조회[KTX공주역 진입지방도 선형개량공사(21수용1096호)		‘21.11.22	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 일시정지 해제 결의		‘21.12.08	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ [재착공계]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업(3차분)		‘21.12.09	정명훈 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 물가변동(ES) 조정 요청에 따른 검토보고		‘21.12.10	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 설계변경 검토보고(전체분2차 및 3차분1차)		‘21.12.15	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 임목폐기물처리용역(1구간) 설계변경 검토보고		‘21.12.21	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 건설폐기물처리용역 설계변경 검토보고(전체분2회,3차분1회)		‘21.12.21	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ [기성검사원]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 건설폐기물처리용역(2차분)		‘21.12.24	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ [기성검사원]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 임목폐기물처리용역		‘21.12.24	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 건설폐기물처리용역 설계변경 정정 검토보고(전체분2회,3차분1회)		‘21.12.24	김정흠 공주지소장 강현수 보수1팀장 소순원 주무관
○ [선금신청서]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 임목폐기물처리용역(1구간)		‘21.12.29	탁상욱 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 실정보고 검토보고		‘22.03.03	김정흠 공주지소장 민병준 보수1팀장 소순원 주무관
○ [선금신청서]KTX공주역 진입지방도 선형개량사업(1구간)4차분		‘22.03.29	정명훈 주무관
○ [착공계]KTX공주역 진입지방도 선형개량공사(1구간)(4차분)		‘22.04.11	정명훈 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 일시정지 검토보고		‘22.04.29	김정흠 공주지소장 민병준 보수1팀장 소순원 주무관
○ KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 설계변경 검토보고(전체분3차 및 4차분1차)		‘22.06.27	김정흠 공주지소장 민병준 보수1팀장 소순원 주무관