연번 36

정책실명제 대상사업 사업내역서

①정책사업명	국도40호 운곡교차로 위험도로 개선공사
② 추진배경	국도40호선 교통량 증대에 따른 도로 혼잡 및 사고위험 개선 (전국 국도 위험도로 개선 6단계 대상지)
③ 사업개요	교차로 개선 L=0.33km, B=20.0m, 교량 재가설 2개소
④ 사업부서	종합건설사업소 홍성지소		⑤ 담당자	지소장 임형균 시설8급 김범식
⑥ 선정기준	총 사업비 50억원 이상		⑦ 사업기간	‘19.09.~‘23.03.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 의뢰 ※ 홍성지소-16139(2017. 12. 20.)호		‘17.12.20..	유재원 지소장 김남호 팀장 조민희 주무관
○ 소규모환경영향평가 의뢰 ※ 홍성지소-8225(2018. 08. 21.)호		‘18.08.21.	유재수 지소장 김남호 팀장 김진호 주무관
○ 실시설계용역 완료		‘18.12.27.	유재수 지소장 김남호 팀장 김진호 주무관
○ 공사 착공		‘19.09.02.	김성수 지소장 이기세 팀장 이완철 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 고시 ※ 충청남도 고시 제2020-172호		‘20.04.10.	김성수 지소장 이기세 팀장 이완철 주무관
○ 폐기물처리용역 착수		‘20.08.18.	원종성 지소장 이기세 팀장 김범식 주무관
○ 전기공사 착공		‘22.02.27.	임형균 지소장 정경화 팀장 김범식 주무관
○ 국도40호 운곡교차로 위험도로 개선공사 2022년분 발주 ※ 홍성지소-4974(2022.05.12.)호		‘22.05.12.	임형균 지소장 정경화 팀장 김범식 주무관